(사)한국감정평가사협회 신축회관 인테리어 공사 입찰공고

1. 입찰 개요

(1) 입찰명 : (사)한국감정평가사협회 신축회관 인테리어 공사

(2) 공고기간 : 2019년 4월 23일(화) 11:00 ∼ 4월 30일(화) 16:00

(3) 발주기관 : (사)한국감정평가사협회

(4) 공사내용

- 공사위치 : 서울특별시 서초구 방배동 1022-5 외 3필지 신축회관

- 공사범위 : 한국감정평가사협회 신축회관(4∼6층) 인테리어 공사

(건축, 기계설비, 전기·통신, 소방공사)

(5) 공사기간 : 2019년 5월 6일(월) ∼ 2019년 7월 2일(화)

*준공일 기한 엄수하여야 하며, 공사기간 준수 가능업체만 참여 요망

2. 입찰 방식 : 제한경쟁입찰/총액(가격)입찰

3. 낙찰자 결정

(1) 가격평가(60점) + 수행능력평가(20점) + PT평가(20점) 후 최고득점 업체를 적격대상업체로 선정

① 입찰참가업체는 10페이지(A4) 이내의 분량으로 PPT파일을 입찰등록 서류와 함께 이메일 제출(namsyo9@kapanet.or.kr)하여야 합니다.

② PT자료에는 다음 사항을 포함(예시)하여 10분 내외로 설명할 수 있도록 작성하여야 합니다.

- 회사소개 및 현장소장(예정자) 프로필 소개

- 대표 시공 사례 및 해당 회사만의 강점

- 안전 및 품질관리계획, 공정관리계획, 인원투입계획 및 하도급관리계획

- 기타사항 등

③ PT평가는 2019년 5월 2일(목) 15시30분에 실시함

-PT장소:서울시 서초구 강남대로 587 KCC건설빌딩 8층, 중회의실

(2) 적격대상업체 선정 후 해당 업체와 계약 세부내용에 대한 개별 협의 후 최종 계약 체결 예정임

4. 입찰 참가자격 : 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자

(1) 입찰공고일 현재 서울 및 수도권에 주된 영업소를 둔 업체로서 건설산업기본법에 따라 실내건축공사업으로 등록한 업체로서 소방시설공사업법에 따른 소방시설공사업 면허를 소지·등록한 업체(소방공사는 공동수급 허용)

(2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조에 따른 입찰참가 자격요건을 갖춘 업체로서 같은법 시행령 제76에 따른 입찰참가자격을 제한받고 있지 아니한 업체

(3) 2018년도 인테리어 공사실적(건축, 기계, 전기, 소방 포함)을 50억원 이상 보유한 업체

- 공종별 협력업체의 공사실적을 포함하되, 공종별 산출내역서 상의 금액 비율을 한도로 적용하여 산정함

5. 예정금액 : 금일십육억원정(￦1,600,000,000 / 부가가치세 포함)

* 입찰금액이 예정금액을 초과하거나 예정금액 대비 80% 미만인 경우에는 입찰 심사 대상에서 제외됨

6. 입찰 등록

(1) 일 시 : 2019. 04. 29(월) 13:00 ∼ 04. 30(화)  16:00

(2) 방 법 : 입찰서류는 직접 방문하여 제출하여야 함(우편접수 불가)

(3) 장 소 : 서울시 서초구 방배동 1021-14  파크애비뉴빌딩 403호

(사)한국감정평가사협회 건축감독본부

(4) 제출 서류

① 입찰참가신청서 및 입찰보증금납부서 각 1부

② 입찰서 및 공종별 입찰금액 산출내역서 각 1부

③ 사업자등록증(사업자등록 증명원 포함), 건설산업기본법령에 따른 실내건축공사업 등록증 및 소방시설공사업 등록증(공동수급업체 포함) 각 1부

④ 법인인감증명서 및 사용인감계 각 1부

⑤ 국세 및 지방세 완납 증명서 각 1부

⑥ 공인된 신용평가기관이 발행한 신용평가서(회사채·기업어음·기업신용) 1부

⑦ 인테리어공사 시공실적 집계표 및 실적증명서 원본(관련 협회 발행분 또는 발주처 발급분)

⑧ 공정 입찰/계약이행 서약서 1부

* 첨부 서식 참고

(5) 입찰보증금

① 입찰금액의 100분의 5이상의 금액을 현금(은행 또는 체신관서 발행 자기앞수표 포함) 또는 금융기관의 지급보증서, 이행보증보험증권, 국채증권, 건설공제조합보증서를 등록 마감일시까지 납부하여야 함

② 입찰등록 마감일시까지 입찰보증금을 납부한 업체만 본 입찰에 참여할 수 있음

③ 낙찰자가 소정 기일내에 계약을 체결하지 아니하거나 그 의무를 이행하지 아니한 때에는 입찰보증금은 우리 협회로 귀속됨

(6) 입찰무효

① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조제4항 및 동시행규칙 제44조에 따른 입찰무효 사유에 해당하는 경우

② 우리 협회 계약규정 제19조에 따라 제출한 서류가 허위나 위, 변조로 판명될 경우

③ 본 공사 입찰일까지 등록취소, 휴·폐업, 업무정지, 부도, 화의, 법정관리, 워크아웃, 기타 부정당업체 지정 등의 결격사유가 있는 경우

7. 현장설명회 및 설계도서 열람 등

(1) 본 공사는 현장설명을 실시하고, 현장 설명 참가업체 기준으로 입찰이 가능합니다.

*현장설명회 장소 : 서울시 서초구 방배동 1024-4 덕산빌딩 1층 회의실

*현장설명회 일시 : 2019.04.26.(금) 14시(담당자 : 감독본부 윤남식 사원(02.6012.5207)

(2) 인테리어 설계도서, 물량내역서 및 건축허가조건은 우리 협회 홈페이지(www.kapanet.or.kr)에서 열람하거나 내려받을 수 있습니다.

※ 자료 제공장소 : 협회 홈페이지(www.kapanet.or.kr) ⇒ 알림마당 ⇒ 공지사항

8. 공사내역서 및 정산

(1) 입찰자는 발주자가 제공한 공내역서 양식과 설계도서를 기준으로 입찰신청을 하되 입찰공고의 유의사항 등을 참고하여 산출한다.

(2) 공사도급 계약은 총액계약을 기준으로 하므로 공사비 정산은 없는 것을 원칙으로 한다. 또한 도면 및 시방서 변경이 없는 경미한 변경이나, 설계도서, 입찰공고의 유의사항, 계약서류에 명시되지 않은 사항이라도 관련 법규상 필요하거나 건축, 기계, 전기 등 공종간 오류 및 불일치에 대한 보완 역시 계약금액 범위 내에서 증감없이 시공한다.

(3) 발주자가 제공한 공내역서 또는 공종분류 제공은 입찰의 편의를 위한 참고용일 뿐이며, 공사내역서 작성에 대한 모든 책임은 전적으로 입찰자에 있다. 제공된 공내역서를 근거로 어떠한 설계변경도 요청할 수 없다.

(4) 입찰자는 발주자가 제시한 설계도면(도면, 시방서, 계산서 등) 및 관계자료, 입찰지침서 및 질의회신 등 어느 한 곳에라도 표현되었다면 해당 사항을 공사내역서 작성시 반영하여야 하며, 누락 및 착오에 대한 책임은 전적으로 입찰자가 진다.

(5) 입찰 시 제공된 공내역서상의 아이템 및 수량은 내역서 작성 시 단순 참고용으로 제공된 자료이므로 향후 실제 공사 시 수량 변경에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 도면 및 시방서가 공내역서 상의 스펙보다 우선하며 “을”의 판단에 의한 스펙 변경 항목은 인정하지 아니한다.

(6) 본 공사는 제반작업(물가상승, 고소작업, 야간작업, 돌관작업 등) 할증은 추가로 인정하지 않으므로 입찰자는 이를 사전에 감안하여 공사 내역서를 작성하여야 한다.

(7) 추가공사비 정산을 목적으로 입찰자가 일방적으로 공사를 지연하거나 중단하여 발주처에게 손실이 발생할 경우 입찰자는 지체상금 이외에 해당하는 손실 금액을 전액 보상하여야 한다.

(8) 입찰자는 공사 착공 후, 설계도서에 누락된 경미한 사항이 있더라도 기술적 및 상식적으로 본 공사의 완벽한 시공에 필요한 사항은 입찰자의 부담으로 이행하여야 한다. 또한 공사 중 시공이 불가한 사항과 의문이 있는 사항은 즉시 발주처와 협의하여 공문서로 결정된 사항에 따라야 하며, 이를 무시한 임의 시공은 입찰자의 책임하에 재 시공 되어야 한다.

(9) 발주처는 입찰 당시의 공사범위, 사용자재, 지급자재 등을 계약 체결 후라도 변경할 수 있고, 이로 인해 현격한 공사비 증감과 설계변경이 필요하다고 인정될 때에는 입찰자에게 서면으로써 통지하고, 입찰자는 설계변경 등에 따른 공사비 증감 내역서를 산출하여 근거 서류(설계변경 개요, 사유, 설계변경 전, 후 도면, 물량산출서, 단가 산출근거 서류 등)와 공기 증감 여부에 대한 실정보고를 2 주일 이내에 발주처에게 제시하여야 하며 발주처의 결정사항에 따라야 한다. 또한 입찰자는 설계변경으로 인한 공사 제반사항에 최대한 협조하여 공사에 임하고, 공기 및 공사비 등은 협의하여 처리한다.

(10) 입찰자는 기 선정된 회관신축 시공사(보미건설)가 현장공사 및 관리를 수행중이므로 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 용전·용수비, 바닥몰탈 타설비, 페기물처리비, 도로점용 관련 업무수행, 양중 장비의 지급이 없으므로 내역서 산출시 필요한 부분은 반영하여야 합니다.

- 회관신축 시공사(보미건설)의 안전관리 규정 및 현장 운영방침에 필히 협조하여야 합니다.

- 시공범위 중 타 공종과 간섭되는 부위(예. 공용부 경계벽 및 창호 등)를 선 시공하여야 하며, 소방검사 등 준공 관련 감리단의 지시사항에 충실히 따라야 합니다.

9. 대가지급방법

(1) 계약을 이행한 후 시공결과에 대하여 발주처 또는 발주처에서 지정한 감리업체의 검사, 검수를 받아 정상 이행한 것으로 확인된 경우 세금계산서를 첨부하여 대가를 청구하면 발주처의 대금지불조건에 따라 계좌 입금에 의한 방법으로 대가를 지급함.

(2) 대금 지불 조건

① 지급 통화 : 원화(KRW)

② 대가의 지급 조건 : 준공검사 완료후 20일이내 현금지급

③ 계약금 : 계약금액의 10%

④ 기성금 지급 : 공정율에 의거 지급

⑤ 계약이행보증 : 계약금액의 10%에 해당되는 금액을 현금 또는 계약이행 보증보험 증권을 제출함

⑥ 하자보증기간 : 공사완료 후 2 년

⑦ 하자이행보증율 : 총 공사비의 10%에 해당되는 금액을 현금 또는 하자이행 보험증권을 제출함

⑧ 지체상금율 : 계약기간 내에 공사를 완료하지 못한 경우 매 지연일 당 총 계약금액의 1/1,000 에 해당하는 금액을 계약금액에서 공제함

⑨ 산업재해 및 근로자 재해에 관한 모든 책임은 입찰자에게 있음

10. 기타 사항

(1) 입찰에 참가하고자 하는 업체는 본 공사 입찰에 필요한 제반사항을 사전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.

(2) 소방공사의 경우 공동수급이 가능하며, 건설산업기본법 제29조에 따라 다른 공사업자에게 일괄하여 하도급을 줄 수 없습니다.

(3) 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

(4) 제출서류 미비로 인한 불이익의 책임은 입찰자에게 있으며, 제출서류에 허위 사실이 발견될 경우에는 입찰심사 및 낙찰 대상에서 제외됩니다.

(5) 본 계약은 총액계약이며, 입찰서에 본 공사의 모든 공종을 포함하는 총괄금액을 기입(부가세 포함)하여야 합니다.

(6) 입찰자는 건축허가조건에 적합하게 공사계획을 수립하여야 하고, 공사에 필요한 각종 인·허가 등 허가조건에 있는 모든 사항을 시공자의 비용으로 시공자가 관련 업무를 수행하여야 합니다.

(7) 모든 서류의 인감 날인은 우리 협회에 제출한 사용인감계의 인감으로 날인하여야 하며, 사본 서류는 원본대조필, 사용인감을 날인하시기 바랍니다.

(9) 지장물 처리 및 공사 시행중 발생하는 건설폐기물은 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제21조에 따른 건설폐기물 수집운반업과 건설폐기물 중간처리업 허가를 겸유한 업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울시에 소재한 업체에 위탁하여 처리하여야 합니다.

(8) 입찰공고 및 관련 서류에 명시되지 아니한 사항은 우리 협회가 정하는 바에 따릅니다.

(9) 입찰서류 제출시 해당서류나 실적증명서 등에 인덱스를 활용해 주시기 바랍니다.

(10) 기타 사항 내용 문의

- (사)한국감정평가사협회 건축감독본부 윤남식(☎02-6012-5207, 010-4302-5932)

11. 첨부 서류

(1) 입찰서류 심사 평가 기준표

(2) 입찰참가신청서 (양식1)

(3) 입찰서 (양식2)

(4) 입찰보증금 납부서 (양식3)

(5) 인테리어공사 시공실적 집계표 (양식4)

(6) 공정 입찰/계약이행 서약서 (양식5)

위와 같이 공고합니다.

2019년 4월 23일

한국감정평가사협회장

<첨부 1>

입찰서류 심사 평가 기준표

심 사 분 야		세 부 심 사 항 목	평 점
합 계			100
수행능력평가	경영상태	신용등급에 의한 평가	10
	시공경험	2018년 인테리어공사 시공실적에 의한 평가	10
PT평가		관리감독위원에 의한 평가	20
가격평가		예정금액 이하의 입찰가격에 의한 평가	60

<첨부2 / 양식1>

입찰 참가 신청서 * 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
신 청 (법) 인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호 사업자번호
	주 소			회사 전화 번호
	대 표 자
입찰개요	입 찰 공 고 번 호	제 호		입 찰 일 자
	입찰 건명	한국감정평가사협회 신축회관 인테리어공사 시공업체 선정
입찰보증금	납 부	ㆍ보증금율 : 5 % ㆍ보증금액 : 금 원정(￦ ) ㆍ보증금납부방법 :
	납부면제 및 지급 확약	ㆍ사유 : 발주처 승인 ㆍ본인은 낙찰후 계약미체결시 귀행에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 직위 / 성명 :		사용인감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀사의 제한경쟁 입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 입찰유의서, 입찰의 세부사양 및 계약조건 등 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. <첨부 서류> 1. 입찰유의서 1부 2. 공정 입찰/계약 이행 서약서 3. 계약일반조건 1부(세부사양서 포함) 4. 기타 공고로써 정한 서류 년 월 일 신청(법)인 (인) (사)한국감정평가사협회장 귀하

입찰유의서

제1조 [목적] 이 입찰유의서(이하 "유의서"이라 한다)는 (사)한국감정평가사협회 (이하 "협회"라 한다)가 시행하는 공사, 용역, 물품의 구매를 위한 입찰에 있어 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

제2조 [입찰참가자격] 입찰에 참가할 수 있는 자는 협회가 시행하는 공사, 용역, 물품 등의 품질(성능) 이나 기술수준이 당사가 요구하는 일정수준 이상인 자라야 하며, 협회의 처분으로 입찰참가자격이 제한 또는 정지된 자는 입찰에 참가할 수 없다.

제3조 [입찰참가신청] ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 지정된 기한 내에 협회에서 요구하는 다음 각 호의 서류를 입찰신청 마감시간 까지 당사에 제출하여 입찰 신청을 하여야 한다.

1. 입찰참가신청서(당사 소정 양식) 및 첨부서류

2. 입찰보증금 또는 입찰보증금 지급각서

3. 기타 공고 또는 공문에서 요구하는 서류

② 제①항 경우에는 원본을 제시하거나 사본에 "원본과 같음"을 명기하고 인감(인감증명서상의 인감 또는 입찰참가신청서상의 사용인감)으로 날인하여 제출하여야 한다.

제4조 [입찰보증금] ① 총액계약의 입찰금액 또는 단가계약의 구매예정금액(구매예정수량 X 입찰단가)의 5/100 이상의 현금(체신관서 또는 시내 금융기관발행 자기앞수표 포함) 또는 공인기관의 보증보험증권(보증서 포함) 또는 협회가 인정하는 은행지급보증서 등으로 입찰 신청 마감일까지 당사에 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금을 당사에 귀속한다.

③ 입찰보증금은 입찰절차 종료 후 입찰자의 청구에 의하여 반환한다. 그러나 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결시까지 반환하지 아니한다.

④ 보증보험증권 또는 보증서 등에 의한 입찰보증금의 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일부터 30일 이후까지 이어야 한다.

제5조 [입찰] ① 입찰 참가신청 또는 입찰 참가승낙을 한 자가 아니면 입찰에 참가 할 수 없다.

② 입찰 전에 위임장을 제출한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다.

③ 입찰 참가 부정당한 자 또는 입찰 참가자격을 제한 받고 있는 자는 대리인으로 할 수 없다.

④ 입찰에 사용하는 인감은 입찰참가 신청시 제출한 인감으로 하여야 한다.

제6조 [입찰서 작성] ① 입찰은 소정의 서식에 의한 입찰서에 의하여 작성하여야 한다.

② 입찰서의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다. 다만, 금액은 정정할 수 없다.

③ 입찰서의 금액표시는 한글 또는 한자로 기재하여야 하며, 아라비아 숫자로 부기 할 수 있다. 이 경우 아라비아 숫자로 병기한 금액이 한글 또는 한자로 기재된 금액과 차이가 있을 때에는 한글 또는 한자로 기재한 금액에 의한다.

④ 입찰가격은 협회가 지정하는 장소의 인도, 설치 가격, 제비용 및 부가가치세를 포함한 가격으로 한다.

제7조 [입찰서의 제출 등] ① 입찰서는 1인 1통을 제출하는 것을 원칙으로 한다.

② 입찰서는 봉함하여 제출하여야 한다.

③ 입찰서는 입찰공고 등에서 허용하고 있을 때에는 우편으로도 제출할 수 있다. 이 경우 우편증의 분실, 훼손 또는 지연에 대하여 당사는 책임을 지지 아니한다.

④ 입찰자는 제출한 입찰서를 교환․변경 또는 취소할 수 없다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 협회가 이를 인정하는 경우에는 취소가 가능하다.

제8조 [경쟁입찰의 성립] 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로서 성립한다.

제9조 [입찰의 무효] 다음 각 호의 하나에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰 참가자가 1인인 입찰

2. 입찰 참가 자격이 없는 자가 한 입찰

3. 대리권이 없는 자가 한 입찰

4. 입찰서가 소정의 일시까지 소정 장소에 도착하지 아니한 입찰

5. 동일사항에 대하여 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

6. 동일사항에 대하여 타인의 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

7. 입찰서의 입찰금액 등 중요한 부문이 불분명하거나, 정정한 후 정정날인을 누락한 입찰

8. 담합하거나 타인의 경쟁 참가를 방해 또는 집행을 방해한 자의 입찰

9. 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰참가 신청서에 제출한 인감으로 입찰서에 날인되지 아니한 경우 포함)

10. 입찰서에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로 계약담당직원이 이를 인정한 입찰

11. 소정의 입찰서를 사용하지 않거나, 입찰서의 금액을 아라비아 숫자로만 기재한 입찰

제10조 [관계사항의 숙지] 입찰서는 입찰공고 조건, 입찰유의서, 입찰기기 제안 사양, 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생한 책임을 입찰 참가자에게 있다.

제11조 [입찰의 연기 등] ① 협회는 입찰 공고 후, 필요한 경우에는 입찰 또는 개찰의 일시를 연기할 수 있다. 다만, 이러한 경우에는 그 사유와 연기 일시를 입찰자에게 통지 하여야 한다.

② 입찰이 성립되지 아니하거나 낙찰자가 없을 때 에는 다시 입찰에 부칠 수 있다.

제12조 [낙찰자의 결정]  유효한 입찰자 중 협회에서 정하는 예정가격 이하의 업체 중 협회의 평가기준에 따른 적격업체를 낙찰자로 한다. 다만, 낙찰자와의 세부 계약내용 협의 불성립으로 계약이 체결되지 아니할 때에는 차순위 적격업체 순으로 협의를 통해 낙찰자를 결정할 수 있다.

제13조 [계약의 체결] ① 낙찰자는 협회로부터 낙찰통지를 받은 후 즉시 소정서식의 계약서에 의하여 계약을 체결하여야 하고, 그 낙찰금액에 대한 최종 산출내역서를 제출하여야 한다.

② 협회는 낙찰자가 정당한 이유없이 제①항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니하는 때에는 낙찰을 취소할 수 있다.

③ 제①항의 규정에 의하여 협회와 계약을 체결하고자 하는 자는 협회가 필요로 하는 서류를 계약담당직원에게 제출하여야 한다.

제14조 [계약의 성립] 계약은 계약서를 작성하고 계약담당직원과 낙찰자가 기명․날인(외국인에 대하여 서명이 포함된 경우에는 서명을 포함)함으로써 확정한다.

제15조 [부정당업자의 입찰참가자격 제한] 입찰자 또는 낙찰자가 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 1월이상 2년이하의 기간동안 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

1. 계약을 이행함에 있어서 부실․조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자

2. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

3. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자

4. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조․변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자

5. 고의로 무효의 입찰을 한 자

6. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유없이 당해 입찰에 참가하지 아니한 자

7. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

8. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

9. 정당한 이유없이 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자

제16조 [비밀유지의 의무] 입찰자는 협회로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰외 목적으로 사용하여서는 아니된다.

제17조 [기타사항] 입찰공고조건 및 이 유의서에 명시되지 아니한 기타사항에 대하여는 협회에서 정하는 바에 따른다.

위의 입찰유의사항과 귀 협회의 입찰조건 및 지시사항을 준수할 것을 승낙하고 아래의 입찰참가를 신청합니다.

년      월      일

◎ 공 고   번 호 : 제              호

◎ 입 찰   건 명 :

◎ 신청인 주  소 :

회사명 :

대표자 :                            (인)

(사)한국감정평가사협회장 귀하

공 사 도 급 계 약 서
계 약 명	(사)한국감정평가사협회 신축회관 인테리어공사
사 업 현 장(공종)	인테리어공사(건축, 기계, 전기·통신, 소방공사)
계 약 금 액	금 정(\ /부가가치세 및 설치비 포함)
계 약 기 간	2019. . ~ 2019. .
계 약 보 증 금 (납 부 방 법)	\ (계약금액의 10 %) (이행(계약)보증보험증권 또는 계약보증서)
대 금 지 급 방 법	공사완료(납품 포함) 및 대금 청구일로부터 20일이내 현금지급
하자담보 책임기간	납품 및 검수 완료한 날로부터 2년
하 자 보 증 금 (납 부 방 법)	\ (계약금액의 5%), (이행(하자)보증보험증권 또는 하자보증서)
지 체 상 금 률	매 1일당 계약금액의 0.1%
(사)한국감정평가사협회(이하 “협회”라 한다)과 계약상대자는 본 계약서 및 붙임의 문서에 의하여 상기의 사업현장에 대한 공사도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 계약의 증거로서 본 계약서를 작성하여 당사자간 기명날인(전자서명 포함)한 후 각각 1부씩 보관(전자적 보관 포함) 한다. [붙임 서류] 1. 계약특수조건 2. 설계서 또는 산출내역서, 규격서 3. 그외 계약관련서류 계약일자 : 2019년 월 일 [협회/계약자] 상 호 : (사)한국감정평가사협회 주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 KCC건설빌딩 8층 대표자 : 회장 김 순 구 (인) [계약상대자] 상 호 : 주식회사 주 소 : 대표자 :

공사도급계약서

제1조(목적) 이 조건은 협회와 계약상대자가 계약상의 책임을 성실히 이행하기 위한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “계약상대자”라 함은 협회와 공사도급계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

2. “계약목적물”이라 함은 계약서 및 계약서의 “붙임 서류”에서 정한 내용에 따라 계약상대자가 그 이행을 완성하여 협회에게 납품 또는 인도(이하 "납품"이라 한다)하여야 할 대상물을 말한다.

3.  “사업수행“이라 함은 계약의 이행을 위한 제반 활동을 말한다.

4. “사업수행의 완성”이라 함은 계약상대자가 계약기간 내에 계약목적물을 협회에게 납품 및 설치를 완료하는 것을 말한다.

5. "납품기한" 또는 "납기"라 함은 계약상대자가 계약에 따른 계약목적물을 협회가 지정하는 장소에 납품하여야 할 기일을 말하며, 그 구체적 시기는 계약체결 시 또는 계약목적물 발주 시에 정한다.

6. "검사" 또는 "검수"라 함은 협회 또는 협회가 지정하는 대리인이 계약상대자가 납품한 계약목적물의 내용, 품목, 규격, 수량, 품질 및 설치 등의 이상 유무를 검사 또는 검수하는 행위를 말한다.

7. "지체상금"이라 함은 계약상대자가 정해진 납기에 계약목적물을 완성하여 인도하지 못할 경우 그 경과된 일수에 비례하여 협회에게 지급하여야 하는 지연손해금을 말한다.

8.  "하자보수"라 함은 하자담보책임기간 중에 발견된 계약목적물의 결함을 수정하는 것을 말한다.

9.  “설계서”라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 물량내역서를 말한다.

가. “공사시방서”라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말한다.

나. “설계도면”이라 함은 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말한다.

다. “현장설명서”라 현장설명 시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보 또는 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서를 말한다.

라. “물량내역서”라 함은 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 규격,수량,단위 등이 표시된 내역서를 말한다.

10. “산출내역서”라 함은 물량내역서에 수급인이 단가를 기재하여 도급인에게 제출한 내역서를 말한다.

제3조(계약문서) ① 계약문서는 계약서와 계약서의 “붙임 서류”에 기재한 문서로 구성되며 상호 보완의 효력을 가진다.

② 이 조건에서 정한 계약일반사항 외에 당해 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 협회와 계약상대자가 협의하여 계약특수조건을 명시할 수 있다.

③ 제7조에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

④ 계약내용에 대한 해석의 우선순위는 다음 각 호의 순으로 한다. 다만, 별도로 세부사항을 정한 경우에는 그에 따른다.

1. 공사도급계약서

2. 계약특수조건

3. 설계서 및 산출내역서, 규격서

4. 입찰유의서

제4조(공정계약 준수 의무) ① 계약상대자는 계약과 관련하여 관계법령을 준수하고, 공정하고 투명하게 계약을 이행하여야 한다.

② 계약상대자는 계약과 관련한 이해관계인에게 직·간접적으로 금품, 향응 및 편의제공 등 공정한 거래질서를 위반하는 행위를 하여서는 아니 된다.

③ 계약상대자가 제2항의 규정을 위반한 경우 협회는 계약을 해지 또는 해제할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대하여 어떠한 경우에도 손해배상 등 이의를 제기하지 못함은 물론 이에 따라 협회에 발생한 손해 전부를 부담하여야 한다.

④ 전항의 경우 협회는 협회가 시행하는 사업에서 계약상대자의 참여를 배제할 수 있다.

제5조(계약의 범위) ① 계약상대자가 협회에게 공급하는 계약목적물의 상세 내용은 계약서의 “붙임서류”에 기재한 설계서, 산출내역서 또는 규격서, 사양서, 명세표 등(이하 “규격서등”이라 한다)의 내용과 같다.

② 계약상대자는 계약목적물의 내역 및 사양을 변경할 수 없다. 다만, 내역의 변경이 협회에게 유리한 경우에는 계약상대자는 사전에 협회의 승인을 받아 변경할 수 있다.

제6조(사용언어) ① 계약을 이행함에 있어서 사용하는 언어는 한국어로 함을 원칙으로 한다.

② 협회는 계약체결 시 제1항에 불구하고 필요하다고 인정하는 경우에는 외국어를 사용하거나 외국어와 한국어를 병행하여 사용할 수 있다. 이 경우 외국어로 기재된 사항이 한국어와 상이한 때에는 한국어로 기재한 사항이 우선한다.

제7조(통지 등) ① 구두(口頭)에 의한 통지, 신청, 청구, 요구, 회신, 승인 또는 지시 등(이하 "통지 등"이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다. 다만, 협회 또는 계약상대자가 긴급하게 통지한 경우에는 통지 즉시 효력이 있다.

② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.

③ 통지 등의 효력은 계약문서에 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날부터 발생한다.

④ 계약당사자는 계약이행 중 이 조건 등에서 정한 바에 따라 서면으로 정당한 요구를 받은 경우에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 한다.

제8조(채권양도) ① 계약상대자는 계약의 이행을 위한 목적 이외에는 이 계약에 의하여 발생한 채권(계약대금청구권)을 제3자에게 양도, 증여, 대물변제, 대여 또는 담보(이하 "양도 등"이라 한다)로 제공하지 못한다.

② 계약상대자는 제1항에서 규정한 양도 등을 하고자 하는 경우에는 사전에 협회의 서면 승인을 받아야 한다.

제9조(계약보증금) ① 계약상대자는 계약의 이행을 보증하기 위하여 다음 각 호의 하나에 해당하는 방법으로 계약체결일까지 협회에 계약보증금을 납부하여야 한다.

1. 현금(「회사법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 정기예금증서, 유가증권 포함)

2. 협회를 보증처로 하는 「회사법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 지급보증서

3. 협회를 보증처로 하는 협회가 인정하는 공제조합이 발행한 보증서

4. 협회를 피보험자겸 보험수익자로 하는 협회가 인정하는 보증보험증권

② 계약상대자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우에 제10조 제1항에 의하여 협회에 귀속사유가 발생할 때에 계약이행보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 보증하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서(이하 "계약보증금지급각서"라 한다)를 제출하여야 한다.

③ 계약상대자는 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 제1항의 규정에 따라 추가로 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 반환 청구할 수 있다.

④ 협회는 제1항 제1호에 명시된 현금 또는 유가증권으로 이미 납부된 계약보증금을 계약상대자가 특별한 사유로 제1항 제2호 내지 제4호에 명시된 보증서 또는 보증보험증권(이하 "계약보증증서"라 한다.)으로 대체 납부할 것을 요청한 때에는 동일한 가치 상당액 이상으로 대체 납부하게 할 수 있다.

⑤ 계약보증증서로 계약보증금을 납부한 경우로서 계약이행기간의 연장이 있을 때에는 계약상대자는 소정 기일 내에 계약보증증서의 계약이행보증기간을 연장하여 제출하여야 한다.

⑥ 계약보증증서로 계약보증금을 납부한 경우 계약보증증서의 보증기간 개시일은 계약기간 개시 전으로 하고 그 종료일은 계약기간 종료 후로 한다.

제10조(계약보증금의 처리) ① 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금은 협회에 귀속한다.

② 제9조 제2항의 규정에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금이 협회에게 귀속사유가 발생하여 협회의 납부요구가 있을 때에는 계약상대자는 당해 계약보증금을 지체 없이 현금으로 납부하여야 한다.

③ 제2항에 따른 계약보증금을 납부하지 않는 경우 기성 또는 기납 부분에 대한 미지급액과 상계 처리할 수 있다.

④ 계약상대자가 납부한 계약보증금은 계약이 이행된 후 또는 계약 해지 후 계약상대자의 청구에 의하여 반환한다.

제11조(제3자 권리의 사용) ① 계약상대자는 계약을 이행함에 있어서 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 특허권, 저작권, 상표권, 소프트웨어, 영업비밀 등 지적재산권을 침해하지 않음을 보장하여야 하며, 그를 사용할 때에는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다. 그러나 협회가 계약문서에 수행방법을 지정하지 아니하고 그 수행 또는 적용을 요구할 때에는 계약상대자에 대하여 제반 편의를 제공•알선하거나 소요된 비용을 지급할 수 있다.

② 업무를 수행하는데 있어서 제3자 권리의 사용이 필요한 경우 협회와 계약상대자는 당해 제3자와의 사이에 라이센스 계약체결 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

③ 계약에 따라 계약상대자가 협회에 납품한 계약목적물에 대하여 제3자로부터 지적재산권의 침해를 이유로 협회에의 청구 또는 소송을 제기당하는 경우에는 계약상대자는 그의 책임과 비용으로 협회를 방어하고 면책시켜야 한다. 만약, 지적재산권 침해로 계약목적물을 사용할 수 없을 경우에는 계약상대자는 지급받은 대금을 협회에 전액 반납하여야 한다.

제12조(계약기간의 연장) ① 계약상대자는 제22조 제3항 각 호의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체없이 협회에게 서면으로 계약기간의 연장을 청구하여야 한다.

② 협회는 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 협회는 제1항의 연장청구를 승인하였을 경우 동 연장기간에 대하여는 제22조의 규정에 의한 지체상금을 부과하지 아니 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 계약기간을 연장한 경우는 제22조의 규정에 의하여 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 협회와 계약상대자가 상호 합의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

⑤ 협회는 제1항 내지 제4항에도 불구하고 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 이미 발생한 지체상금이 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약의 이행이 협회가 인정하는 불가피한 사유로 인하여 지연된 때에는 계약기간을 연장할 수 있다.

⑥ 제5항의 규정에 의한 계약기간의 연장은 이미 발생한 지체상금이 계약보증금상당액에 달한 때에 하여야 하며, 연장된 계약기간에 대하여는 제22조의 규정에 불구하고 지체상금을 부과하지 아니 한다.

제13조(불가항력) ① “불가항력”이라 함은 태풍, 홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동, 기타 계약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유(이하 "불가항력의 사유"라 한다)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다.

② 제1항에서 규정한 불가항력의 사유로 인하여 다음 각 호에 발생한 손해는 협회가 부담한다.

1. 제15조의 규정에 의하여 검사를 마친 기성부분

2. 검사를 마치지 아니한 부분 중 객관적인 자료(감독일지, 사진 또는 비디오테입 등)에 의하여 이미 수행되었음이 판명된 부분

③ 계약상대자는 제2항의 손해가 발생하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 협회에게 통지하여야 하며, 협회는 통지를 받았을 때에는 즉시 그 사실을 조사하고 그 손해의 상황을 확인한 후 그 결과를 계약상대자에게 통지하여야 한다.

④ 협회는 제3항의 규정에 의하여 손해의 상황을 확인하였을 때에는 별도의 약정이 없는 한 계약금액의 변경 또는 손해액의 부담 등 필요한 조치를 계약상대자와 협의하여 이를 결정한다. 다만, 협의가 성립되지 않을 때에는 제28조에 따라 처리한다.

제14조(계약이행 상황의 감독) ① 협회는 필요하다고 인정할 때에는 사업일정에 지장을 주지 않는 범위 내에서 사업수행과정이나 계약이행상황을 관리, 감독할 수 있다

② 협회는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 사업의 수행 또는 물품의 제조를 위하여 사용하는 재료 및 기타 제조공정에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 계약상대자는 협회의 감독업무 수행에 협력하여야 하며, 협회는 감독업무를 수행함에 있어서 계약상대자의 업무를 부당하게 방해하여서는 아니 된다.

④ 협회가 외부감사의 수검 하에 있는 경우 계약상대자도 해당감사의 감독, 지도 하에 있으며, 해당감사가 계약과 관련된 수검 자료 등의 제출을 요청하는 경우 계약상대자는 협회와 협의하여 이에 응하여야 한다. 이러한 경우 제47조의 기밀엄수 의무를 위반한 것으로 보지 아니한다.

⑤ 계약상대자는 협회의 감독자의 정당한 용역업무 지시사항에 대하여 순응하여야 하며 특별한 사안에 대하여는 협회와 계약상대자가 협의하여 시행한다.

제15조(검사) ① 계약상대자는 계약이행을 완성한 때에는 그 사실을 서면으로 협회에게 통지하고 필요한 검사(또는 검수, 이하 같다)를 받아야 한다. 기성(기납)부분에 대하여 계약이행 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도 또한 같다.

② 협회는 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 14일이내(기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일은 제외. 이하 이 조에서 같다)에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 완료하여야 한다. 다만, 천재. 지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있으며, 검사에 소요되는 기간이 객관적으로 부족한 경우에는 협회와 계약상대자가 합의하여 합리적인 범위 내에서 검사기간을 연장할 수 있다.

③ 협회는 제2항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하고 계약상대자는 이 요구에 응하여야 한다. 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통보받은 날로부터 제2항의 기간을 계산한다.

④ 제3항의 경우에 계약이행기간이 연장될 때에는 제22조의 규정에 따라 계약상대자는 지체상금을 납부하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 제2항의 규정에 의한 검사에 입회·협력하여야 한다.. 계약상대자가 입회를 거부하거나 검사에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체에 대하여는 제3항 및 제4항의 규정을 준용한다.

⑥ 협회는 검사를 완료한 때에는 그 결과(합격, 조건부합격, 재검사, 불합격)를 지체없이 계약상대자에게 통지하여야 한다. 이 경우 계약상대자는 검사에 대한 이의가 있을 때에는 재검사를 요청할 수 있으며 협회는 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑦ 검사를 완료하였으나 계약목적물을 정상적으로 사용할 수 없거나 사용이 지연될 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 계약목적물의 대체, 수리 등을 실시하여 정상적인 사용이 가능하도록 하여야 한다.

제16조(인수) ① 협회는 제15조의 규정에 의한 검사에 의하여 사업수행의 완성을 확인(검사결과 합격한 경우)한 후 계약상대자가 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 즉시 당해 계약목적물을 인수하여야 한다.

② 협회는 계약상대자가 제1항의 요청을 아니 한 때에는 당해 계약목적물의 인도를 요구할 수 있다. 이 경우에 계약상대자는 지체 없이 계약목적물을 인도하여야 한다.

제17조(기성부분의 인수) ① 협회는 전체 계약목적물이 아닌 기성부분(성질상 분할할 수 있는 사업수행의 완성부분에 한한다)에 대하여 이를 인수할 수 있다.

② 제16조의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

제18조(선급금, 기성부분의 대가 지급) ① 협회는 필요하다고 인정하는 경우에 계약금액의 30% 이내의 선급금을 계약상대자에게 지급할 수 있다.

② 제1항에 따라 선급금을 지급하는 경우에 계약상대자는 지급받는 선급금 반환을 보증하기 위하여 선급금 이상의 보증금액을 제9조 제1항 제2호 내지 제4호의 하나에 해당하는 방법으로 협회에게 납부하여야 하며, 이의 보증기간은 청구일로부터 계약기간 만료일까지로 하여야 한다.

③ 계약상대자는 단위 계약목적물별로 각 공정별 검사를 완료하는 날까지 기성부분에 대한 대금청구서를 협회에 제출할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 대가 지급은 제19조를 준용한다.

제19조(대가의 지급) ① 계약상대자는 계약이행을 완성한 후 제15조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정의 절차에 따라 대금지급을 청구할 수 있다.

② 협회는 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날로부터 20일 이내(기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일은 제외. 이하 이 조에서 같다)에 그 대금을 지급한다. 다만, 계약상대자와의 합의에 의하여 20일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 대금의 지급기간을 연장할 수 있다.

③ 천재. 지변 등 불가항력의 사유로 인하여 대금을 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 대금의 지급을 연장할 수 있다.

④ 협회는 제1항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다, 이 경우에는 반송한 날로부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

제20조(대가지급지연에 대한 이자) ① 협회는 대가지급청구를 받은 경우에 제19조에 의한 제2항의 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 “대가지급지연일수”라 한다)에 당해 미지급액에 대하여 지연발생 시점에 금융기관 대출평균금리(한국회사 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다. 다만, 협회와 계약상대자가 합의한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사 또는 대가지급이 지연된 경우에 제15조제2항단서 및 제19조제3항에 의한 지연기간은 제1항의 대가지급지연일수에 산입하지 아니한다.

제21조(일반적 손해) ① 계약상대자는 계약의 수행 중 발생한 계약목적물, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다.

② 제16조 및 제17조의 규정에 의하여 인수한 계약목적물에 대한 손해는 협회가 부담한다.

③ 계약상대자가 계약상의 의무를 위반하거나, 고의 또는 과실로 인해 협회에게 손해가 발생한 경우 계약상대자는 협회에게 그 손해를 배상하여야 한다.

④ 협회가 계약상대자로부터 받은 계약보증금, 하자보증금, 지체상금 등은 계약상대자가 계약위반, 불법행위, 계약해지 등으로 발생한 협회의 손해에 대한 배상청구에 영향을 미치지 않는다.

제22조(지체상금) ① 계약상대자는 계약서에 정한 계약기간 내에 계약이행을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액(장기계속계약의 경우에는 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다. 다만, 지체상금의 총액이 계약보증금 상당액에 달한 경우에는 협회는 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

② 협회는 제1항의 경우에 제17조의 규정에 의하여 기성 또는 기납 부분(이하 “기성부분”이라 한다)을 검사를 거쳐 인수(납품되어 대금을 지급한 경우 및 인수하지 아니하고, 관리, 사용하고 있는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우 기성부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 계약목적물에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 계약이행 또는 검사가 지체된 경우에는 그 해당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 제13조에서 규정하는 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 협회의 책임으로 사업수행을 위한 사업 착수가 지연되거나 사업수행이 중단되었을 경우

3. 협회의 책임으로 검사가 지연되었을 경우

4. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체된 경우

④ 협회는 제1항의 규정에 의한 지체일수를 다음 각 호에 따라 산정하여야 한다.

1. 계약기간 내에 계약목적물과 검사서류를 제출한 때에는 제15조의 규정에 의한 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다.

2. 계약기간 만료일 이후에 계약목적물과 검사서류를 제출하였거나 제15조 제3항의 규정에 의한 시정조치를 한 때에는 계약기간 만료일 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

⑤ 협회는 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 산출된 지체상금을 계약상대자에게 지급될 대가, 기타 예치금 등과 상계할 수 있다.

제23조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해지) ① 협회는 계약상대자가 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 시정을 요구하고, 그 후에도 계속 시정하지 아니할 때에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

1. 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 사업수행을 착수하지 아니할 경우

2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 계약기간내에 사업수행을 완성하지 못하거나 완성할 가능성이 없다고 객관적으로 협회가 판단한 경우

3. 제22조 제1항의 규정에 의한 지체상금이 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 사업수행을 완성할 가능성이 없다고 객관적으로 협회가 판단한 경우

4. 장기계속사업의 계약에 있어서 제2차 사업 이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우

5. 계약의 이행과 관련하여 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법, 부정행위가 있는 경우

6. 계약상대자가 거주지나 주소 등 연락처가 불명확하거나 계약이행을 소홀히 할 때

7. 정당한 이유 없이 계약상대자가 계약의 해약을 요구하였을 때

8. 협회가 계약이행을 위하여 요구하는 서류제출, 기타 협조요구에 정당한 이유 없이 불응하거나 고의로 지연시켰을 때

9. 납품한 계약목적물의 품질 또는 서비스의 질이 일정수준 이하로 협회가 판단한 경우

10. 기타 계약상대자가 계약조건을 중대하게 위반하고 그 위반으로 인하여 이 계약의 목적을 달성할 수 없다고 객관적으로 협회가 판단한 경우

② 정당한 이유로 계약상대자가 계약의 해지를 요구한 경우 협회가 그 정당성을 인정하였을 때에는 제9조에 정한 계약보증금을 위약금으로 받지 아니하고 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

③ 협회는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해지한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 서면으로 통지하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 계약상대자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해약통지를 받은 부분에 대한 사업수행은 지체 없이 중지하고 협회의 사전 승인을 받아 모든 기구들을 사업현장으로부터 철거한다.

2. 협회가 요구하는 사업현장의 모든 자료, 정보 및 편의를 협회에게 제공하여야 한다.

⑤ 협회는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해지한 경우에 기성부분을 검수하여 인수하는 때에는 인수한 날로부터 20일 이내(기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일은 제외)에 당해 부분에 상당하는 대금을 계약상대자에게 지급하여야 한다.

⑥ 제1항의 규정에 의하여 계약이 해지되는 경우 계약상대자는 지급 받은 선금에 대하여 미정산 잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 법정이자상당액을 가산하여 협회에 상환하여야 한다. 이 경우 협회는 상환할 금액과 기성부분의 대금을 상계할 수 있다.

제24조(사정변경에 의한 계약의 해지) ① 협회는 제23조 제1항 각 호의 경우 외에 협회의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 제23조 제3항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해지하는 경우에 이를 준용한다.

③ 협회는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해지하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 금액을 해지한 날부터 20일 이내(기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일은 제외)에 계약상대자에게 지급하여야 한다. 이 경우 제9조의 규정에 의한 계약보증금을 동시에 반환하여야 한다.

1. 제13조 제2항 제1호 내지 제2호의 규정에 해당하는 수행부분의 대금 중 지급하지 아니한 금액

2. 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력․자재 및 장비의 철수비용

④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산 잔액이 있는 경우에는 이를 협회에 상환하여야 한다. 이 경우 미정산 잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제25조(무상하자보수 및 무상보증수리 등) ① 계약상대자는 계약목적물에 대한 검사 완료시부터 계약서에 정한 기간(이하 "하자담보책임기간"이라 한다)동안 계약목적물에 대한 무상하자보수(이하 "하자보수"라 한다) 및 무상보증수리(이하 "A/S"라 한다) 책임이 있다. 다만, 동 기간이 경과되었더라도 그 기간 내에 하자보수 및 A/S를 요청한 경우에는 하자보수 및 A/S가 종료되었음을 협회가 확인한 날에 하자보수 및 A/S기간이 종료된다.

② 계약상대자는 하자보수 또는 A/S 요구를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 당해 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 협회에 제출하여야 한다.

③ 계약상대자는 계약목적물의 하자로 인하여 협회에게 손해가 발생한 경우 이를 배상할 책임이 있다.

제26조(하자보증금) ① 계약상대자는 계약목적물의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보증금을 제9조 제1항 제2호 내지 제4호의 하나에 해당하는 방법으로 협회에게 납부하여야 한다.

② 계약상대자는 계약서에 정한 하자담보책임기간 중 회사로부터 하자보수 요구를 받고 이에 불응하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보증금은 협회에 귀속한다.

③ 계약상대자는 하자보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우에 제2항의 규정에 의하여 협회에 귀속사유가 발생할 때에 하자보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서(이하 "하자보증금지급각서"라 한다)를 협회에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 의한 방법으로 하자보증금을 납부한 경우, 보증서 또는 보증보험증권의 보증기간 개시일은 제15조에 의한 검사를 완료한 날로 하고 그 종료일은 하자담보책임기간 종료일 이후로 한다.

⑤ 협회는 하자담보책임기간의 종료 시에 계약상대자의 요구에 따라 하자보증금을 계약상대자에게 반환하여야 한다. 다만, 단위 계약목적물별로 하자담보책임기간이 서로 다른 경우에 있어서는 분야별 하자담보책임기간이 만료되어 보증목적이 달성된 분야의 하자보증금은 계약상대자의 요구가 있을 경우 즉시 반환하여야 한다.

제27조(기술 및 교육지원) ① 계약상대자는 계약목적물의 설치 및 운영과 관련하여 협회가 요구하는 경우에는 계약기간 내에 그에 필요한 인력 및 기술을 무상으로 지원하여야 한다.

② 계약상대자는 계약목적물의 개발, 인수, 운영, 유지보수 등의 기술이전 상 필요한 교육을 협회가 요구하는 경우 계약기간 내에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

③ 계약이 완료되어 계약목적물을 운영하였을 때 사업수행에 문제점이 발견될 때 이의 해결을 위해서 계약상대자는 필요한 기술지원을 하여야 한다.

제28조(분쟁의 해결) ① 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다.

② 제1항의 규정에 의한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 민사소송법이 정한 관할법원의 판결에 의하여 해결한다.

③ 계약상대자는 제1항 및 제2항 규정에 의한 분쟁기간 중 계약이행을 중지하여서는 아니 된다.

제29조(협회의 계약이행 요청) ① 협회는 계약상대자가 계약문서에서 정하고 있는 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 때에는 계약상대자에게 계약상의 의무이행을 서면으로 요청할 수 있다.

② 계약상대자는 제1항의 조항에 의하여 협회의 통지를 받은 날로부터 7일 이내에 이행계획을 협회에게 통지하여야 한다.

③ 계약상대자가 제2항에 의한 기간내에 통지를 하지 않거나 계약상의 의무이행을 거부하는 때에는 협회는 당해 기간이 경과한 날 또는 의무이행을 거부한 날부터 계약의 전부 또는 일부의 이행을 정지할 수 있다.

제30조(공사감독관)  ① 제14조에 의거 협회는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 스스로 감독하거나 자신을 대리하여 다음 각 호의 사항을 행하는 자(이하 “공사감독관”이라 한다)를 선임할 수 있다.

1. 시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일

2. 계약이행에 있어서 계약상대자에 대한 지시, 승낙 또는 협의하는 일

3. 공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일

4. 공사의 기성부분 검사, 준공검사 또는 계약목적물의 인도에 입회하는 일

5. 기타 공사감독에 대하여 회사가 위임하는 일

② 공사감독관은 계약상대자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 할 수 없다.

③ 협회는 제1항의 조항에 의하여 공사감독관을 선임한 때에는 그 사실을 즉시 계약상대자에게 통지하여야 한다.

④ 계약상대자는 공사감독관의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히 부당하다고 인정할 때에는 협회에게 그 사유를 명시하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제31조(현장대리인의 배치) ① 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 현장대리인(건설산업기본법령에서 정한 바에 따라 당해 공사의 주된 공종에 상응하는 건설기술자를 말한다)을 착공 전에 지명하여 협회에게 통지하여야 한다.

② 제1항의 대리인은 협회가 동의한 경우를 제외하고는 공사현장에 상주하여 시공에 관한 일체의 사항에 대하여 계약상대자를 대리하며, 공사의 시공관리 및 기타 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

제32조(공사현장 근로자) ① 계약상대자는 공사의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 인력을 가진 근로자를 채용하여야 하며 채용된 근로자의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 진다.

② 계약상대자는 채용한 근로자에 대하여 협회가 해당 계약의 시공 또는 관리상 현저히 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

③ 계약상대자는 제2항에 의하여 교체된 근로자를 협회의 동의 없이 해당 공사를 위해 다시 투입할 수 없다.

④ 계약상대자는 원활한 사업수행이 이루어질 수 있도록 주기적으로 근로자를 교육·관리·감독하여야 하며, 채용된 근로자에 대하여 신원보증에 관한 조치를 취하여야 한다.

제33조(착공신고 및 공정보고) ① 계약상대자는 계약서에서 정한 바에 따라 착공하여야 하며, 착공 시에는 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 협회에게 제출하여야 한다.

1. 현장대리인 선임계

2. 공사예정공정표

3. 공사비 산출내역서

4. 공정별 인력 및 장비 투입 계획서

5. 기타 회사가 요청한 사항

② 계약상대자는 계약의 이행 중에 제1항의 규정에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 협회에게 제출하여야 한다.

③ 협회는 제1항 및 제2항의 조항에 의하여 제출한 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 때에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

④ 협회는 계약상대자가 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 요청할 수 있다.

1 공정률 및 수행공사금액

2 인력,장비 및 자재현황

3 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용

제34조 (공사기간) ① 공사착공일과 준공일은 계약서에 명시된 계약기간으로 한다.

② 계약상대자의 귀책사유 없이 공사착공일에 착공할 수 없는 경우에는 계약상대자의 현장인수일자를 착공일로 하며, 이 경우 계약상대자는 공사기간의 연장을 요청할 수 있다.

③ ”준공일”은 계약상대자가 공사를 완성하고 협회에게 서면으로 준공검사를 요청하고 준공검사에 합격한 날을 말한다.

제35조 (공사자재의 검사) ① 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질, 품명 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 그러나 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 또는 표준품에 상당하는 자재로서 계약의 목적 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

② 공사에 사용할 자재는 사용 전에 전부 공사감독관의 검사를 받아야 하며, 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

③ 검사 결과, 불합격품으로 결정된 자재는 공사에 사용할 수 없다. 다만, 공사감독관의 검사에 이의가 있을 때에는 계약상대자는 협회에 대하여 자재의 재검사를 요구할 수 있다.

④ 제3항의 조항에 따라 계약상대자의 재검사 요구에 대하여 협회는 정당한 사유 없이 검사를 지체할 수 없으며 즉시 재검사 등의 조치를 취하여야 한다.

⑤ 계약상대자가 불합격된 자재를 즉시 이송하지 않거나 대품으로 대체하지 않을 경우에는 협회는 일방적으로 불합격된 자재를 제거하거나 대품으로 대체시킬 수 있다.

⑥ 계약상대자는 자재의 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 하며, 검사 또는 재검사 등을 이유로 계약기간의 연장을 요구할 수 없다. 다만, 제4항의 조항에 따라 재검사 결과 적합한 자재인 것으로 판명될 경우에는 재검사에 소요된 기간에 대하여는 계약기간을 연장할 수 있다.

⑦ 공사에 사용하는 자재 중 조합 또는 시험을 요하는 것은 공사감독관의 참여 하에 그 조합 또는 시험을 하여야 한다.

⑧ 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 준공후 외부에서 확인할 수 없는 공사는 공사감독관의 참여 없이 시공할 수 없다. 다만, 사전에 협회의 서면승인을 받고 사진, 비디오 등으로 시공방법을 확인할 수 있는 경우에는 시행할 수 있다.

⑨ 계약상대자 제1항 내지 제8항에서 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지 않는 시공을 하였을 때에는 협회는 언제든지 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있으며 이로 인하여 계약금액을 증감하거나 공사기간을 연장할 수 없다.

제36조(지급자재와 대여품) ① 계약에 의하여 협회가 지급하는 자재와 대여품은 공사예정공정표에 의한 공사일정에 지장이 없도록 적기에 인도되어야 하며, 그 인도장소는 시방서 등에 따로 정한 바가 없으면 공사현장으로 한다.

② 제1항의 조항에 따라 지급된 자재의 소유권은 협회에게 있으며 계약상대자는 협회의 서면승낙 없이 공사현장 외부로 반출하여서는 안된다.

③ 제1항의 조항에 따라 인도된 지급자재와 대여품에 대한 관리상의 책임은 계약상대자에게 있으며,

계약상대자가 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 협회에게 변상하여야 한다.

④ 계약상대자는 지급자재 및 대여품의 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 즉시 협회에게 이를 통지하고 그 대체를 요구할 수 있다.

⑤ 자재 등의 지급지연으로 공사가 지연될 우려가 있을 때에는 계약상대자는 협회의 서면승낙을 얻어 자기가 보유한 자재를 대체 사용할 수 있다. 이 경우 협회는 대체 사용한 자재 등을 계약상대자와 합의된 일시 및 장소에서 현품으로 반환하거나 또는 대체사용 당시의 가격에 의하여 그 대가를 최종대가 지급 시까지 계약상대자에게 지급하여야 한다.

⑥ 협회가 지급한 자재와 대여품 등은 계약의 목적을 수행하는 데에만 사용할 수 있으며, 자재 및 대여품의 인도 후에 발생하는 운송비와 기타 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

⑦ 협회가 필요하다고 인정할 때에는 계약상대자와 협의 하에 지급자재 또는 대여품 등의 수량, 품질, 규격, 인도시기, 인도장소 등을 변경할 수 있으며, 공사내용의 변경으로 인하여 필요없게 된 지급자재 및 사용 완료된 대여품 등은 지체없이 협회에게 반환하여야 한다.

제37조 (응급조치) ① 계약상대자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 미리 응급조치를 취하고 즉시 이를 협회에 통지하여야 한다.

② 협회는 재해방지 및 기타 공사의 시공상 부득이하다고 인정할 때에는 계약상대자에게 응급조치를 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 즉시 이에 응해야 하며 계약상대자가 제3자로 하여금 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 응급조치에 소요된 경비는 실비를 기준으로 협회와 계약상대자가 협의하여 부담한다.

제38조 (공사의 일시정지) ① 협회는 다음 각 호의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다. 이 경우에 계약상대자는 정지기간중 선량한 관리자의 주의의무를 게을리 하여서는 안된다.

1. 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

2. 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우

3. 제37조에 의한 응급조치의 경우

4. 기타 협회가 필요하다고 인정하였을 경우

② 제1항에 의하여 공사가 정지된 경우에 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추가금액을 청구할 수 없다. 다만, 계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니한다.

제39조 (설계변경 등) ① 설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

3. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

4. 기타 협회가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

② 제 1항에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 협회가 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있다고 인정한 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.

③ 협회는 제1항의 조항에 따라 설계변경 사유가 발생하였을 경우, 이로 인하여 계약기간의 변경, 계약금액의 증감이 필요한 때에는 계약상대자와 협의하여 결정한다.

④ 원 설계를 변경하여 공사 시 변경된 공사예정공정표, 공사비 산출내역서, 설계도면, 기타 수요자가 요청한 자료 등을 사전에 제출한 뒤 협회의 승락을 득하고 시공하여야 한다.

제40조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 협회는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격 단가보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 때에는 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.

2. 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.

② 협회가 설계변경을 요구한 경우에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위 안에서 회사와 계약상대자가 성실히 협의하여 결정한다.

제41조(하도급의 금지) 계약상대자는 계약된 공사를 회사의 사전 서면승인 없이 제3자에게 위임 또는 하도급시킬 수 없다.

제42조(휴일 및 야간작업) ① 계약상대자는 계약문서에서 별도로 규정하고 있지 아니하는 한, 협회의 필요에 의한 경우를 제외하고는 협회의 승인 없이 휴일 또는 야간작업을 할 수 없다.

② 계약상대자는 제1항의 규정에 의하여 협회의 승인을 받아 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에도 그로 인한 추가비용을 청구할 수 없다. 다만, 협회와 계약상대자의 합의에 의한 기간단축 및 협회의 부득이한 사유로 인하여 휴일 또는 야간작업을 지시하였을 경우에는 그러하지 아니하다.

제43조(폐기물의 처리 등) 계약상대자는 공사현장에서 발생한 폐기물을 관계법령에 의거 처리하여야 하며 협회는 폐기물처리에 소요되는 비용을 계약금액에 반영하여야 한다.

제44조(발굴물의 처리) ① 공사장에서 계약상대자나 그의 고용인이 발견한 모든 가치 있는 화석, 금전, 보물 기타 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 관계법규의 정하는 바에 의하여 처리한다.

② 계약상대자나 그의 고용인은 제1항의 물품이나 유물을 발견하였을 때는 즉시 협회에게 통지하고 그 지시에 따라야 하며 이를 취급할 때에는 파손이 없도록 적절한 예방조치를 하여야 한다.

제45조(관공서등 대외기관과의 교섭 및 인,허가와 손해배상책임) ① 계약상대자는 계약수행에 관련하여 관공서 등 대외기관 또는 개인과의 인.허가등에 필요한 모든 사항은 계약상대자의 책임하에 이를 처리하여야 한다.

② 계약상대자는 계약수행 중 주변의 재산, 타인 또는 타인의 소유물에 손해를 끼치거나 협회의 임직원 및 계약상대자의 종업원과 고용원 등이 상해 또는 기타의 위해를 입었을 때에는 계약상대자의 책임과 부담 하에 처리하여야 하며 협회에게 하등의 피해가 가지 않도록 하여야 한다

제46조(개인정보처리위탁) 계약상대자가 협회로부터 개인정보처리를 위탁받는 때에는 협회의 개인(신용)정보보안관리 약정서(위탁업체계약용)을 적용하기로 한다.

제47조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무) ① 협회는 계약서상의 규정에 의하여 계약상대자가 제출하는 각종보고서, 정보, 기타자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 협회의 이익을 위하여 복사, 이용 또는 공개할 수 있다. 다만, 계약상대자가 “대외 비공개“로 표시하여 제출한 자료에 대해서는 계약상대자와 사전에 협의하여 공개할 수 있다.

② 계약상대자는 계약을 통하여 얻은 정보 또는 협회의 비밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보에 대해서는 그러하지 아니하다.

1. 비밀유지의무를 지는 것이 없이 이미 보유하고 있는 정보

2. 비밀유지의무를 지는 것이 없이 제3자에게서 정당하게 입수한 정보

3. 상대방에게서 제공을 받은 정보가 아닌 독자적으로 개발한 정보

4. 이미 공공에 공지된 정보

5. 협회로부터 공개를 허락받은 정보

6. 법령에 의하여 공개의무가 있는 정보 또는 법원 기타 법령에 따라 제출요구 권한이 있는 기관으로부터 제출을 요구받은 정보

제48조(특약사항) 기타 조건에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 협회와 계약상대자가 합의하여 별도의 특수조건을 정할 수 있다.

계약특수조건

제1조(대금지급 방법 및 시기)

분할 회차	대금구분	지급금액	지급시기
합계

제2조(       )

설계서 또는 산출내역서, 규격서

별첨 :

공기 준수 서약서

공 사 명 : (사)한국감정평가사협회 신축회관 인테리어 공사

발 주 처 : (사)한국감정평가사협회

공사업체명 :

계 약 기 간 : 2019.05.06부터 ~ 2019.07.02까지

당사는 한국감정평가사협회 신축회관의 인테리어 공사를 시행함에 있어서 지정 공사 기간 내에 최고의 품질로 완수할 것을 약속합니다.

2019 년      월       일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 :                        (인)

<첨부3 / 양식2>

입 찰 서
입찰내용	공고번호		입찰일자	2019. . .
	건 명	한국감정평가사협회 신축회관 인테리어 공사
신청자	업체명		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전화번호
	대표자
입 찰 금 (부가세포함)		일금 한글( 원) 일금 숫자(\ ) * 입찰금액의 한글과 숫자가 일치하지 않으면 한글로 기재한 금액으로 합니다.
당사는 위의 건으로 귀 협회에서 공고한 공사입찰에 참가하고자 입찰공고 사항을 모두 승낙하고, 위의 기재사항이 틀림이 없음을 확인하여 본 입찰서를 제출합니다. 2019. . . 신청인 업체명 : 대표자 : □ 한국감정평가사협회장 귀하

<첨부4 / 양식3>

입찰보증금 납부서
입찰내용	공고번호		입찰일자	2019. . .
	건 명	한국감정평가사협회 사옥 신축공사
납부자	업체명		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전화번호
	대표자		-
입찰보증금	보증금율
	보증금액	일금 원정 (￦ )
	보증금 납부방법
당사는 위의 건으로 귀 협회에서 공고한 공사입찰에 참가하고자 위의 금액을 입찰보증금으로 납부합니다. 2019. . . 신청인 업체명 : 대표자 : □ 한국감정평가사협회장 귀하

<첨부5 / 양식4>

2018년 인테리어공사 시공실적 집계표

1. 집계대상

적 용 기 간	2018.1.1.~12.31일 사이에 시공된 건축물
해 당 용 도	업무시설	문화집회시설	교육연구시설 등

2.집계표	업체명:

공 사 명	건물용도	발 주 처	연면적(㎡)	시공금액
실 적 계		건

* 각각의 실적을 입증할 수 있는 관련협회 또는 발주처에서 발급한 증명서 첨부 요망

<첨부6 / 양식5>

공정 입찰/계약 이행 서약서

(사)한국감정평가사협회 귀중

당사는 (사)한국감정평가사협회에서 시행하는 모든 공사, 용역, 물품 등의 입찰 참여 및 계약을 체결함 (준공ㆍ납품 이후를 포함함, 이하 같음)에 있어 공정하고 투명하게 입찰 및 계약을 하기 위하여 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 직원에게 직․간접적으로 금품, 향응, 편의 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2. 입찰가격의 사전 협의, 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선ㆍ청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

4. 당사 임․직원이 관계 직원에게 금품, 향응, 편의 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 등의 공정 입찰을 위한 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 공정 입찰/계약 이행 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 (사)한국감정평가사협회의 조치와 처분과 관련하여 당사가 (사)한국감정평가사협회를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서약일자 :        년       월       일

서 약 자 :(회사명)

(대표자)                             (인)